2022파주건축문화제 전시장 조성

과 업 지 시 서

2022. 8. 10.

(사)파주출판문화정보국가산업단지입주기업체협의회

Ⅰ		과업개요

1. 사 업 명 : 2022파주건축문화제 전시장 조성 공사

2. 전시개요

가. 전 시 명 : 2022파주건축문화제

나. 전시주제 :《건축과에너지》

다. 일    시 : 2022. 10. 21. ∼ 2022. 11. 20.

라. 장    소 : 서축공업기념관 이벤트홀 198.3m2

마. 주    소 : 경기도 파주시 문발로 312, 1층

바. 주    최 : [사]파주출판문화정보국가산업단지 입주기업체협의회

3. 과업목적 : 2022파주건축문화제 전시관을 방문한 방문객들에게 정확하고 효율

적인 정보(전시주제) 전달과 편안한 관람이 될 수 있는 환경을 조성하고자 함

4. 용역기간 : 계약체결일 ∼ 행사종료 후 완료보고서(시공,철거) 제출 시까지

- 공사기간 : 2022. 10. 3. ∼ 2022. 10. 14.

- 유지·보수기간 : 완공일로부터 ∼ 2022. 11. 20.

- 철거 및 복구공사 : 2022. 11. 21. ∼ 2022. 11. 30.

5. 사업설명 : 제안요청서 참조

6. 사 업 비 : 일금사천만원정(₩40,000,000 부가세 및 제세공과금 포함)

7. 계약방법 : 협상에 의한 계약

8. 과업주체 : 이하 본 과업지시서에는 주최자인 (사)파주출판문화정보국가산업단

지입주기업체협의회를 ‘발주처’라고 하고, 과업수행자를 ‘선정업체’라고

한다.

Ⅱ		과업의 내용

1. 일반사항

가. ‘선정업체’는 본 과업을 수행함에 있어 관계 법령 및 제 규정에 따라 성실히 수행해야 하며, 과업 목적의 달성을 위하여 필요한 사항은 ‘발주처’의 지시에 따라 보완해야 한다.

나. ‘발주처’ 측의 설계변경 요구가 있을 경우 ‘선정업체’는 안전 ‧ 특이사항 등을 검토하고 ‘발주처’와 협의 후 시공을 진행한다.

다. 착수계, 준공계 등 관련 법규와 규정에 의거 제출한다.

라. 과업의 사업 계획 및 수행은 ‘발주처’와 면밀한 협의 및 세부내용별 사전승인을 받아 진행하되, 필요에 의해 ‘발주처’가 과업의 범위 및 내용의 변경을 요청할 경우 특별한 사유가 없는 한 협의를 거쳐 이를 성실히 반영한다.

2. 과업의 일정

가. 용역기간 : 계약체결일 ∼ 행사종료 결과보고서 제출 시까지

나. 공사기간 : 공사기간 : 2022. 10. 3. ∼ 2022. 10. 14.

다. 유지·보수기간 : 완공일로부터 ∼ 2022. 11. 20.

라. 철거 및 복구공사 : 2022. 11. 21. ∼ 2022. 11. 30.

3. 과업의 범위

가. 공간적 범위

- 전시공간 세부실시설계(생략 가능) 및 내역서 작성

- 전시공간 조성공사 : 인포그래픽 설치, 전시물설치, 전기배선, 벽체 구성공사 등을 포함한 공간 조성공사 및 철거 및 복구공사 등

- 구조물 제작(좌대, 선반 등) 및 공간연출에 필요한 추가작업 등

- 전시기간 중 전시공간 및 제작물 유지, 보수 및 관리 등 전시공간 사후관리

- 전시종류 후 전시장 철거 및 복구(바닥, 벽 등), 폐기물 처리

- 기타 전시장 조성 공사와 관련하여 ‘발주처’에서 별도 지정하는 사항 등

나. 주요조건

- 공사범주는 전시기획서에 따른 대상 공간 조성 공사 및 ‘발주처’와 협의가 이루어진 작품별 전기설비 및 조명사용, 대피동선, 구조물 제작(좌대, 선반  등), 철거 및 원상 복구까지로 한다.

- 자재 확보 및 시공은 전문작업자가 수행하며, 작업의 안정성을 확보하여 기본적인 안전(사고)과 여러 특이사항을 고려하여 시공하여야 한다.

- ‘발주처’가 지정한 예산범위 내 시공함을 원칙으로 한다. (장비비, 교통비, 인건비, 자재비, 유지보수, 폐기물 처리 등 전시장 조성비용 및 철수 일체)

- 계약기간 내 시공내역의 유지보수를 포함하는 것을 원칙으로 한다.

- 전시추진 일정을 고려하여 즉시 착수 가능하며 수시 협의·조정이 가능하여야 한다.

※ 과업의 모든 기본 사항은 전시기획서와 합의된 내역서, 시방서 등에 준함

※ 단, 현장 및 전시 여건에 따라 발주처와 선정업체의 공동협의 하에 변경 가능함

Ⅲ		설계·시공 및 설치 조건

1. 전시공간 실시설계

가. ‘선정업체’는 ‘발주처’가 제공한 전시기획서를 기준으로 하여 실시설계를 진행한다(생략가능).

- ‘발주처’가 정한 가벽(파티션) 높이를 반영하여 설계한다.

- ‘발주처’가 수시 제공하는 자료를 토대로 수정하며 ‘발주처’와 합의하여 확정한다.

나. 주요 시공 소재는 ‘발주처’가 정한 소재로 설계한다.

※ 전시기획서를 바탕으로 ‘발주처’가 지정하고, 기타 ‘발주처’와 ‘선정업체’가 협의한 소재를 사용한다.

다. 실시설계 시 관람객의 동선 및 충분한 관람공간을 확보하여야 한다.

라. 중량구조물의 안전한 설치가 가능하도록 구조 검토 및 내역을 산출하여 실시설계에 반영한다.

2. 전시공간의 시공

가. ‘선정업체’가 작성하여 확정된 실시설계대로 시공한다.

나. ‘선정업체’가 확정된 실시설계를 토대로 인력투입계획이 포함된 작업계획서를 제출한 후, ‘발주처’와 합의하여 진행한다.

다. 상호 합의된 일정은 ‘발주처’가 인정한 특별한 사유가 없는 한 엄수 한다.

라. 시공에 투입되는 인력은 법이 정한 안전 장비를 의무적으로 착용하여야 하며, 선정업체는 안전사고에 대비한 계획을 제출하여야 한다.

마. ‘선정업체’는 시공에 필요한 재료를 해당 공정 전까지 확보, 시공현장에 반

입하여야 하며, 계약일 기준 자재비용을 산정하고 이후 물가상승률에 따른 추

가비용은 청구하지 않는다.

바. ‘선정업체’는 작품 및 관람객 안전 관리상 위험요인이 있는 시공사항에 대해서 기존설계비용 내에서 최대한 신속히 처리한다.

사. ‘선정업체’는 ‘발주처’가 지정한 전시관의 가벽(파티션)을 시공한다.

아. ‘선정업체’는 중량구조물의 안전한 설치 및 관리와 관련한 ‘발주처’의 요구사항을 수용하여 시공한다.

3. 전시공간의 철거 및 복구

가. ‘선정업체’는 전시행사 종료일(2022. 11. 20.) 10일 전까지 전시공간 철거계획을 ‘발주처’와 상의하여야 한다.

나. ‘선정업체’는 전시행사 후 전시작품이 완전히 철수하기 전까지는 전시공간을 철거하여서는 안 된다.  ※ 작품철수 일정 추후 통보

다. 전시공간 철거에 따른 폐기물 처리 등 철거비용은 시공예산에 포함한다.

라. 전시공간의 철거복구는 장소 대관 종료일 전에 마무리하여야 한다.

마. ‘선정업체’는 기타 공간철거 및 복구에 필요하다고 판단되어 ‘발주처’가 요구하는 사항을 시행하여야 한다.

4. 현장 관리

가. 작업자는 반드시 ‘선정업체’의 전문설치인력이 진행해야 한다.

나. ‘선정업체’는 설치과정 중 전시장이나 기반시설이 손상될 경우에는 즉각적인 복구 및 변상을 해야 한다.

다. ‘선정업체’는 전시장 내 작품을 절대 임의로 이동하거나 훼손해서는 안 되며, 시공 및 공간의 보수 등으로 인한 작품의 손상이 우려되는 경우 발주처 담당자에게 사전보고 후 지시사항에 따른다.

라. 작업자의 풍기 및 위생단속을 철저히 하고, 당일 작업이 완료되면 작업장 의 정리․정돈, 청결과 도난이나 화재 예방을 위한 조치를 해야 한다.

마. ‘선정업체’는 ‘산업안전보건법’ 및 ‘중대재해처벌법’상의 준수해야 할 의무를 충실히 이행하여야 한다.

바. 본 과업의 수행 도중 발생한 인적, 물적 피해에 대해 ‘선정업체’가 책임지며, 이로 인한 피해에 대하여 배상하여야 한다.

5. 전시 기간 중 유지 보수 및 관리

가. ‘선정업체’는 시공된 전시공간 및 제작물, 옥내외 설치물 등 설치된 모든 사항에 대해 유지보수를 수행하여야 한다.

나. ‘선정업체’는 전시장 내 점검 및 보수 상황이 발생할 경우 ‘발주처’가 지정한 기한 내에 신속하게 수행해야 한다.

Ⅳ		과업 보고 및 서류 제출

1. 계약체결 후 7일 이내에 착수계를 제출하고 과업수행에 착수하여야 한다.

2. 과업수행 중 또는 그 이전‧이후라도 발주처가 요구할 경우 참석하여 ‘선정업체’는 자재 수급, 설치, 작품구현, 관리 및 운용, 기기 철수 시 작업준비 및 진행사항을 보고하여야 한다.

3. ‘선정업체’는 전시 종료 후 7일 이내 완료계, 설치 사진자료 등 일반 서류를 제출한다.

Ⅴ		기타사항

1. 회의참석 및 보고

가. ‘선정업체’는 ‘발주처’의 요청이 있을 시 본 과업과 관련된 회의 및 보고회 등에 참석하여 설명하고 질의에 응답한다.

나. ‘발주처’의 요청 시 본 과업과 관련된 보고서를 작성한다.

2. 계약변경 및 변경사항 등의 통보

가. 계약서의 내용과 변경되는 상황이 발생할 시 서면으로 소통하며 합의하에 계약의 변경사항이 생길 수 있다.

나. ‘선정업체’는 계약체결 이후 대표자, 담당자 등의 주요한 정보 및 사항이 변동되었을 경우 ‘발주처’로 반드시 통보해야 하며, 불이행으로 인한 손해 시 ‘선정업체’의 책임으로 한다.

3. 이견 발생 시 처리 및 규칙 준용

가. 본 과업지시서의 해석에 문제가 있는 경우 상호 협의하여 변경함을 원칙으로 한다.

나. 본 계약에 규정되지 않은 사항은 국가를 당사자로 하는 계약 관련 법령 및 예규에 의하여 결정한다.

다. 기타 명시되지 아니한 사항은 ‘발주처’와 ‘선정업체’가 협의하여 정한다.

라. 천재지변 및 기타 재난 상황(코로나19 등)의 상황이 발생 시, 계약에 관한 사항은 ‘발주처’와 ‘선정업체’가 협의하여 정한다.